공약분야	미래전략 산업육성	의성 수소연료전지 발전소 조성
관리번호	15

신규여부	계속	총사업비 (백만원)	계	국비		도비		군비		민자 등
완료시기	임기내		300,000	-		-		-		300,000
사업기간	2022~2026	중앙정부 도움필요성		해당없음
사업주체	㈜청암에너지	추진상황	정상추진중		담당자		박*준		전화		6516

현황 및 정책목표

○ 현    황: 탄소중립 에너지원‧신성장동력 확보로 일자리창출 및 그린뉴딜 정책 부응

○ 정책목표: 정부의 신재생에너지 공급확대 정책 부응, 주변지역 열원공급으로 에너지비용 절감

정책개요

○ 사업기간: 2022년 ~ 2026년

○ 대상지역: 의성군 의성읍 철파리 531번지 일원

○ 사 업 량: 39.6MW

○ 면    적: 6,753.08㎡

○ 총사업비: 300,000백만원

재원확보(예산확보) 계획

			(단위 : 백만원)
구 분	계	기투자 (~2022년 상반기)	임기 내 투자					2027년 이후	비고
			2022년 하반기	2023년	2024년	2025년	2026년
계	300,000	900	100	0	0	89,700	209,300	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	300,000	900	100	0	0	89,700	209,300	0

재원확보(예산확보) 실적

							(단위 : 백만원)
구 분	계		기투자 (~2022년 상반기)	2022년 하반기	2023년	2024년		비고
계	1,000		900	100	0	0
국 비	0		0	0	0	0
도 비	0		0	0	0	0
군 비	0		0	0	0	0
민자등	1,000		900	100	0	0

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
단계별 투자실적	백만원	300,000	1,000	0	0	89,700	209,300

추진실적

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행률(%)
단계별 투자실적	백만원	300,000	1,000					0.3%

세부추진실적 및 계획

연도	월	추진실적 및 계획
2022	9	개발행위허가 신청
2023	6	개발행위허가 완료
	9	입찰시장 참여
	12	입찰 미선정
2024	5	제도개선 건의 및 입찰 재시도

공약입법 조례 추진현황

○ 해당없음

문제점 및 대책

○ (문제점) 산자부 및 전기위원회 평가에서 경북도내 수소연료전지 발전사업 모두 유찰

○ (사  유) ① 경북도내 에너지 자립률 215%로 수소연료전지 발전사업 시급성 부족

② 지역에너지 산업 구조상 수소에너지 수용성 부족

○ (대  책) 분산에너지 활성화 차원에서 평가기준 수정 지속 건의

기대효과

○ 연료전지를 활용하여 청정에너지(전기)를 공급함으로써 녹색성장의 기반 구축

○ 주변지역 에너지원 공급으로 친환경에너지 기반 구축