공약분야	스마트농업도시	동부지구 다목적 농촌용수 개발사업
관리번호	20

신규여부	계속	총사업비 (백만원)	계	국비		도비		군비		민자 등
완료시기	임기내		49,497	49,497		-		-		-
사업기간	2019~2025	중앙정부 도움필요성		재정
사업주체	국가 (농림축산식품부)	추진상황	정상추진중		담당자		여*현		전화		6333

현황 및 정책목표

○ 현    황: 물이 풍부한 지역과 부족한 지역의 수계 연결로 수자원의 효율적 이용

○ 정책목표: 전천후 농업용수 확보 및 하천 생태계 보전

정책개요

○ 사업기간: 2019~2025년(7년간)

○ 대상지역: 의성군 옥산면 금봉리, 사곡면 공정리, 춘산면 신흥리 일원

○ 사 업 량: 회동저수지 보강 1개소(저수량 3.3만㎥⇒6.3만㎥)

양수장 2개소(Q=0.66㎥/s), 송수관로 5조 6.14㎞(D700˜D800㎜)

수로터널 3조 2.11㎞(D=1.8m, L1=0.26㎞, L2=1.11㎞, L3=0.74㎞)

도로 2조 2.44㎞

○ 총사업비: 49,497백만원 [국비 100%]

○ 최종목표: 2025년까지 공사 준공 목표

재원확보(예산확보) 계획

			(단위 : 백만원)
구 분	계	기투자 (~2022년 상반기)	임기 내 투자					2027년 이후	비고
			2022년 하반기	2023년	2024년	2025년	2026년
계	49,497	1,857	11,000	11,734	12,000	12,906	0	0
국 비	49,497	1,857	11,000	11,734	12,000	12,906	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0

재원확보(예산확보) 실적

					(단위 : 백만원)
구 분	계	기투자 (~2024년 상반기)	2024년 하반기	2025년	비고
계	49,497	35,091	2,300	12,106
국 비	49,497	35,091	2,300	12,106
도 비	0
군 비	0
민자등	0

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
국가예산확보(누적)	백만원	49,497	12,857	11,734	12,000	12,906
사업 공정율	%	100	27	50	73	100

추진실적

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행률(%)
국가예산확보(누적)	백만원	49,497	12,857	23,734	-	-	-	74
사업 공정율	%	100	27	50	-	-	-	50

세부추진실적 및 계획

연도	월	추진실적 및 계획
2021	4	기본설계 및 우선 시공분 적격 심의(삼부토건 컨소시엄 적격자로 선정)
	11	우선 시공분 계약체결 및 착공(가설사무실 등 부대공사)
2022	5	총공사분 계약체결
	10	전략 및 소규모환경영향평가 완료 시행계획 승인 및 중앙토지수용위원회 협의 요청(경상북도)
2023	4	양수장설치
	10	송수관로 및 터널공사
	11	시행계획 승인 및 공사착공
	12	금봉, 사곡양수장, 가압장, 송수관로, 1호 터널 시공중
2024	1	2호 터널 L=1.1km, 송수관로 공사 시공중
	4	양수장설치(기계, 전기 등)
	10	회동지 보강 공사
2025	12	공사준공

공약입법 조례 추진현황

○ 해당없음

기대효과

○ 용수가 풍부한 금봉지, 사곡지를 춘산면 상류 신흥리와 수계를 연결하여 용수가 부족한 춘산‧가음‧금성 지역의 농업용수 문제 해결

○ 농업용수 활용의 다각화로 수자원의 효율적인 활용과 하천 생태계 보전에 기여