공약분야	경쟁력있는 관광자원 확충	단밀 쓰레기산 생태축 복원사업
관리번호	35

신규여부	계속	총사업비 (백만원)	계	국비		도비		군비		민자 등
완료시기	임기내		8,500	5,950		765		1,785		-
사업기간	2022~2025	중앙정부 도움필요성		재정
사업주체	의성군 (환경축산과)	추진상황	정상추진중		담당자		곽*석		전화		6181

현황 및 정책목표

○ 현    황: 생태 복원 사업 설계 완료 및 부지 정비 중

○ 정책목표: 자연생태계 회복 및 주변자원과 연계한 생태체험으로 지역주민에게 높은 수준의 생태복지서비스 제공

정책개요

○ 위    치 : 단밀면 생송리 1042-1번지 일원

○ 기    간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)

○ 총사업비 : 8,500백만원(기금 5,950, 도 765, 군 1,785)

○ 최종목표 : 생물서식지 복원 47,178㎡

재원확보(예산확보) 계획

			(단위 : 백만원)
구 분	계	기투자 (~2022년 상반기)	임기 내 투자					2027년 이후	비고
			2022년 하반기	2023년	2024년	2025년	2026년
계	8,500	650	0	2,450	3,571	1,829	0	0
국 비	5,950	385	0	1,715	2,500	1,350	0	0
도 비	765	50	0	220	321	174	0	0
군 비	1,785	215	0	515	750	305	0	0

재원확보(예산확보) 실적

					(단위 : 백만원)
구 분	계	기투자 (~2022년 상반기)	2023년(본예산)	2024년(본예산)	비고
계	6,671	650	2,450	3,571
국 비	4,600	385	1,715	2,500
도 비	591	50	220	321
군 비	1,480	215	515	750

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
생태축 복원	%	100 (생태축 복원)	15 (설계 진행)	35 (설계 완료 , 부지정비 착공)	80 (1차 공사 착·준공)	100 (2차공사 착·준공)	-

추진실적

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행률 (%)
생태축 복원	%	100 (생태축 복원)	15 (설계진행, 생태복원 위원회심의)	30 (부지정비 착공)	35 (조경‧건축 발주)	-	-	35

세부추진실적 및 계획

연도	월	추진실적 및 계획
2022	3	(道)재정투자심사 및 원가심사
	4~12	생태복원계획(안) 수립, 환경청 및 주민의견 수렴 복원위원회 기술검토 요청
	8~9	부지 경매낙찰 및 소유권이전 완료
2023	1~6	생태복원계획(안) 복원위원회 기술검토 및 의견반영 인허가 및 설계도면·내역서 작성
	8~11	실시설계, 환경영향평가 및 인허가 완료
	12	공사(토공 및 부지정비, 성토 등) 착공
2024	1~6	공사(토공 및 부지정비, 성토 등) 준공
	8~12	1차 공사(조경 및 건축, 통신) 착공 및 준공
2025	2~12	2차 공사(조경 및 건축, 통신) 착공 및 준공

기대효과

○ 생태복원을 통해 생물다양성 증진 및 자생·고유종의 재정착을 유도하고, ‘쓰레기산’을 자원순환의 중요성을 일깨워주는 공간으로 활용