공약분야	주민 주도의 지역 재생	신평면 지방상수도 공급
관리번호	49

신규여부	계속	총사업비 (백만원)	계	국비		도비		군비		민자 등
완료시기	임기내		8,500	-		6,715		1,785		-
사업기간	2021~2024	중앙정부 도움필요성		해당없음
사업주체	의성군 (상하수도사업소)	추진상황	완료		담당자		권*민		전화		6972

현황 및 정책목표

○ 현    황: 상수도 미급수 지역에 맑고 깨끗한 지방상수도를 확대 공급하여 급수 서비스를 향상하고 주민 숙원을 해소코자 함

○ 정책목표: 상수도시설 확충으로 정주여건 개선 및 지역재생 여건 확보

정책개요

○ 사업기간: 2021년 ~ 2024년

○ 대상지역: 신평면 일원

○ 사 업 량: 상수관로(D150~D16) L=33.6㎞, 배수지 1지, 가압장 3개소

○ 총사업비: 8,500백만원

재원확보(예산확보) 계획

			(단위 : 백만원)
구 분	계	기투자 (~2022년 상반기)	임기 내 투자					2027년 이후	비고
			2022년 하반기	2023년	2024년	2025년	2026년
계	8,500	2,743	0	5,757	0	0	0	0
국 비	0	-	-	-	-	-	-	-
도 비	6,715	2,167	-	4,548	-	-	-	-
군 비	1,785	576	-	1,209	-	-	-	-
민자등	0	-	-	-	-	-	-	-

재원확보(예산확보) 실적

						(단위:백만원)
구 분	계	기투자 (~2022년 상반기)	2022년 하반기	2023년	2024(본예산)	비고
계	8,500	2,743	0	5,757	0
국 비	0	-	-	-	-
도 비	6,715	2,167	-	4,548	-
군 비	1,785	576	-	1,209	-
민자등	0	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
관로매설	km	33.6	10.957	22.643	-	-	-
예산확보	백만원	5,757	-	5,757	-	-	-

추진실적 : 목표 100% 달성

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	이행률(%)
관로매설	km	33.6	10.957	22.643	-	-	-	100
예산확보	백만원	5,757	-	5,757	-	-	-	100

세부추진실적 및 계획

연도	월	추진실적 및 계획
2022	3	2차분 착공
	11	배수지 및 송수가압장 설치
	12	2차분 준공
2023	2	3차분 착공
	7~9	검곡리, 교안리 상수도 공급
	10~11	청운리 상수도 공급
	12	3차분 및 총괄 준공

공약입법 조례 추진현황

○ 해당없음

문제점 및 대책

○ 해당없음

기대효과

○ 급수 서비스 향상에 따른 지역발전 기여

○ 맑은 물 공급으로 수돗물에 대한 신뢰 회복과 물 복지 실현